2022년도 공유재산 관리계획안(정기분)

(동백1동 행정복지센터 신축)

심   사   보   고   서

1. 심사경과

가. 제출일자 및 제안자 : 2021년 11월 12일 용인시장

나. 회   부    일   자 : 2021년 11월 17일

다. 상   정    일   자 : 2021년 11월 23일 제1차 자치행정위원회

2. 제안설명요지 [제안설명자 : 용인시장(재정국장)]

가. 제안이유

❍ 지역주민의 행정수요에 능동적으로 대처하고 인구유입 등 다양한 행정기능에 선제적으로 대응하는 행정서비스를 제공하며,

❍ 시민의 삶의 질 향상과 여가활동을 지원하고 지역주민 소통공간을 마련하기 위해 추진 중인 동백1동 행정복지센터 신축사업과 관련하여,

❍「공유재산 및 물품 관리법」제10조 및 같은 법 시행령 제7조에 따라 공유재산의   취득 계획에 대하여 의회의 의결을 얻고자 함.

나. 사업개요

❍ 위    치 : 기흥구 동백동 577번지

❍ 부지면적 : 3,000㎡

❍ 사 업 량

- 연면적 4,000㎡(지상 3층 / 지하1층)

- 주요시설 : 민원실, 주민자치사무실, 동대본부, 주민운동시설 등

❍ 사 업 비 : 143억원

- 공사비 130억원

- 용역비(설계·감리 등) 13억원

❍ 사업기간 : 2020. 2월 ~ 2025. 10월

□ 재원 조달계획

❍ 재원별

(단위: 백만원)

총 사업비	재원조달계획				비 고
	계	시설비	용지비	기 타
계	14,300	14,300	-	-	사업 부지는 기존 시유지로 사업비에서 제외
국비보조금	-	-	-	-
특별교부세	-	-	-	-
도비보조금	-	-	-	-
시 비	14,300	14,300	-	-
기 타	-	-	-	-

❍ 연도별

(단위: 백만원)

총 사업비	예산편성계획 연도					비 고
	계	2021년	2022년	2023년	2024년
계	14,300	22	811	5,467	8,000
국비보조금	-	-	-	-	-
특별교부세	-	-	-	-	-
도비보조금	-	-	-	-	-
시 비	14,300	22	811	5,467	8,000
기 타	-	-	-	-	-

□ 취득재산

❍ 건   물

(단위 : ㎡, 백만원)

건축물 용도	위 치	연면적 (층규모)	예정가액	주요시설	취득예정 시 기	비 고
업무시설	기흥구 동백동 577번지	4,000 (지상3층 /지하1층)	14,300	민원실, 주민자치사무실, 동대본부, 주민운동시설 등	2025.10월

□ 추진실적 및 추진계획

❍ 2020.  1월 : 행정구역개편(동백동에서 동백1·2·3동으로 분동)

❍ 2020. 10월 : 동백1동 행정복지센터 건립 기본계획 수립(방침)

❍ 2020. 11월 : 중기지방재정계획 반영

❍ 2021.  5월 : 지방재정 투자심사(道) 의뢰

❍ 2021.  7월 : 지방재정 투자심사(道) 승인 완료

❍ 2021.  9월 : 공공건축 사업계획 사전검토 완료

❍ 2021. 10월 : 공유재산심의 승인(원안가결)

❍ 2022.  4월 : 설계공모 등 이행

❍ 2022.  8월 : 기본 및 실시설계 용역 이행

❍ 2023. 10월 ~ 2025. 10월 : 공사 착공 및 준공

□ 검토의견

❍ 취득대상 재산

재 산 종 류	건 수	면 적	예정가액	비 고
건 물	1	4,000㎡	14,300백만원

❍ 현재 동백1동 행정복지센터는 임차 공간이 협소하여 주민자치 프로그램이 미운영 되는 등 동백1동 주민에게 행정‧복지‧문화서비스를 제공하기에 한계가 있으며, 임시청사의 임차에 따라 매월 임차료가 발생하고 있어,

지역주민에게 양질의 행정서비스 등을 제공하기 위하여 행정복지센터 신축은 필요하다 사료됨.

❍ 중기지방재정계획 수립 및 지방재정 투자심사 등 사전 절차이행을 완료하였음.

❍ 다만, 청사 예정지는 동막초등학교와 동백중학교 학생들의 통학로로 청사 신축 시 공사 차량의 진출입계획, 학생들의 등하교 동선 등 세심한 안전대책이 필요한 것으로 사료됨.

4. 질의 및 답변 요지 : 생략

5. 토론요지 : 생략

6. 심사결과 : 원안가결

□ 위치도 및 현장사진

위치도
현장 사진