2022년도 공유재산 관리계획안(정기분)

(버스공영차고지 전기 충전소 구축사업)

심   사   보   고   서

1. 심사경과

가. 제출일자 및 제안자 : 2021년 11월 12일 용인시장

나. 회   부    일   자 : 2021년 11월 17일

다. 상   정    일   자 : 2021년 11월 23일 제1차 자치행정위원회

2. 제안설명요지 [제안설명자 : 용인시장(재정국장)]

가. 제안이유

❍ 환경친화적 대중교통으로의 전환을 위해 버스공영차고지에 전기 충전소 구축하여 대기오염 문제, 온실가스 감축 및 미세먼지 저감에 기여하고자 함.

❍ 「공유재산 및 물품 관리법」제10조 및 같은 법 시행령 제7조에 따라 공유재산의 취득 계획에 대하여 의회의 의결을 얻고자 함.

나. 사업개요

❍ 위    치 : 처인구 남동 687번지

❍ 사 업 량 : 충전 대수 52대

❍ 총사업비 : 25억원

❍ 사업기간 : 2022. 3월 ∼ 2022. 10월

□ 재원 조달계획

❍ 재원별

(단위: 백만원)

총 사업비	재원조달계획				비 고
	계	시설비	용지비	기 타
계	2,500	2,500
도비보조금	750	750
시 비	1,750	1750

❍ 연도별

(단위: 백만원)

총 사업비	예산편성계획 연도						비 고
	계	기투자	2021년	2022년	2023년	2023년 이후
계	2,500	0	0	2,500	0	0
도비보조금	750	0	0	750	0	0
시 비	1,750	0	0	1750	0	0

□ 취득재산

❍ 기   타

(단위 : 백만원)

건축물 용 도	위 치	예정가액	주요시설	취득예정 시 기	토지소유
자동차 관련시설	처인구 남동 687번지	2,500	전기충전시설, 태양광캐노피	2022.10월	용인시

□ 추진실적 및 추진계획

❍ 2021.  9월 : 전기 충전소 도입 계획 수립

❍ 2021. 11월 : 투자심사 및 공유재산 관리계획

❍ 2022.  3월 : 도비 교부

❍ 2022.  4월 ~ 5월 : 실시설계용역

❍ 2022.  6월 ~ 9월 : 전기 충전소 구축공사

❍ 2022. 10월 : 전기 충전소 운영

❍ 2023.  8월 : 공사 준공

□ 검토의견

❍ 취득대상 재산

재 산 종 류	건 수	위 치	예정가액	비 고
기 타	1	처인구 남동 687번지	2,500백만원

❍ 본 사업은 용인시 소유부지의 남동 버스공영차고지에 52대 분량의 전기충전시설과 태양광 캐노피를 설치하고자 하는 것으로,

❍ 환경친화적 대중교통인 전기버스의 원활한 도입과 운행을 위한 사업이며, 중기지방재정계획 수립 및 투자심사 등 사전절차이행을 완료하였음.

❍ 향후 보정버스공영차고지와 서수지IC 회차지에 버스충전시설 도입 시, 공유재산 및 물품관리법 및 지방자치단체 공유재산관리계획 작성 기준에 의거 공유재산 관리계획 변경 여부를 심도 있게 검토해야 할 것으로 사료됨.

4. 질의 및 답변 요지 : 생략

5. 토론요지 : 생략

6. 심사결과 : 원안가결

□ 위치도 및 현장사진

위치도
현장사진