2024년도 공유재산 관리계획안(정기분)

【용인정수장 대체소독설비(현장제조차염) 사업】

의 안 번 호	2023-	제출일자 : 2023. 11. . 제 출 자 : 용인시장

1. 제안이유

❍ 용인정수장의 현재 소독방식인 염소가스는 독성이 강한 가스 상태로 취급하여 누출 사고 시 인명사고 위험성이 높아 상대적으로 안전한 저농도 제조차염 설비로 교체하여 안전하고 깨끗한 수돗물 생산을 하고자

❍「공유재산 및 물품 관리법」제10조 및 같은 법 시행령 제7조에 따라 공유재산의 취득 계획에 대하여 의회의 의결을 얻고자 함.

2. 사업내용

❍ 위    치 : 용인시 처인구 곡현로 619번길 77 (용인정수장)

❍ 사 업 량 : 저농도 제조차염소산나트륨 설비 설치

❍ 총사업비 : 3,640백만원(시비 100%)

❍ 사업기간 : 2024. 1월 ~ 2024. 12월

3. 주요 재산의 취득

가. 취득대상 재산

(단위 : ㎡, 백만원)

재 산 종 류	건 수	면 적	예정가액	비 고
공작물	1	-	3,640

붙임  사업설명서 및 위치도 1부.

용인정수장 대체소독설비(현장제조차염) 사업

(소관부서 : 상수도사업소 정수과)

□ 사업목적

❍ 화학물질관리법 개정(2015년 1월)으로 액화염소가 사고대비물질로 분류됨에 따라 법적규제가 강화되어 화학물질통계조사, 장외영향평가서 작성, 지역주민고지, 위해관리계획서 작성, 정기 및 수시점검 등 법적의무 준수사항이 증가

❍ 액화염소가스는 유독성가스로 누출 사고 시 빠른 확산을 통해 주변지역 인명 피해 가능성이 높아 상대적으로 안전한 대체소독 설비인 저농도 제조 차아염소산나트륨(차염) 설비로 변경하고자 함.

□ 근거법령

❍ 「공유재산 및 물품관리법」제10조의2(공유재산관리계획)

❍ 「공유재산 및 물품관리법 시행령」제7조(공유재산관리계획)

□ 사업개요

❍ 위    치 : 처인구 모현읍 곡현로 619번길 77 (용인정수장)

❍ 사 업 량 : 저농도 제조차염소산나트륨 설비 설치

- 차염발생기, 소금저장탱크, 차염이송 및 저장탱크 등

❍ 총사업비 : 3,640백만원(시비 100%)

❍ 사업기간 : 2024. 1월 ~ 2024. 12월

❍ 운영계획 : 정수과에서 관리 및 운영

❍ 사업비                                           (단위 : 백만원)

구분	기본계획	비고
합계	3,640
공사비	3,400
기계	2,940	차염발생기, 소금저장탱크, 차염주입펌프, 차염이송 및 저장탱크 등
건축	50	기존시설 개량
토목	100	기존시설 개량
부대공	310	공사비의 10%
설계·용역비	230	3,400백만원(공사비)×6.821% = 232백만원 ※「엔지니어링사업대가 기준」 산업플랜트 요율 적용
부대비	10	공사비의 0.342%

□ 재원 조달계획

❍ 재원별

(단위 : 백만원)

총 사업비	재원조달계획				비 고
	계	시설비	용지비	기 타
계	3,640	3,640	-	-
국비보조금	-	-	-	-
균형발전특별회계	-	-	-	-
특별조정교부금	-	-	-	-
시 비	3,640	3,640	-	-
기 타	-	-	-	-

❍ 연도별

(단위 : 백만원)

총 사업비	예산편성계획 연도						비 고
	계	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,640	-	-	3,640	-	-
국비보조금	-	-	-	-	-	-
균형발전특별회계	-	-	-	-	-	-
특별조정교부금	-	-	-	-	-	-
시 비	3,640	-	-	3,640	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-

□ 취득재산

❍ 공작물

(단위 : ㎡, 백만원)

공작물 용도	위 치	연면적 (층규모)	예정 가액	주요시설	취득예정 시 기	비 고
소독설비	처인구 모현읍 곡현로 619번길 77	-	3,640	차염발생기, 소금저장탱크, 차염주입펌프, 차염이송 및 저장탱크 등	2024.12월

□ 추진실적 및 추진계획

❍ 2022. 12월 : 타당성 용역 완료

❍ 2023.  9월 : 중기지방재정계획 반영

❍ 2023. 10월 : 공유재산관리계획 심의, 지방재정투자심사

❍ 2024.  3월 : 실시설계 완료

❍ 2024.  4월 : 공사 착공

❍ 2024. 12월 : 공사 준공

□ 기대효과

❍ 시설 운영의 안전성·효율성 증대 및 수돗물 신뢰도 제고

❍ 근무자의 시설운영 편의성 향상 및 위험요소 해소

❍ 안전한 현장제조 차염설비 도입으로 지역주민 불신 해소

□ 위치도 및 현장사진

위치도
현장 사진

□ 배치도(안)

<지상 1층,평면도>

<지하1층,평면도>

<건물 단면도>