2023년도 공유재산 관리계획안(수시분)

【용인특례시 미니 수소도시 조성사업】

의 안 번 호	2023-	제출일자 : 2023. 12. . 제 출 자 : 용인시장

1. 제안이유

❍ 에코타운의 음식물쓰레기 처리과정에서 나오는 바이오가스를 활용한 수소 생산 및 활용 모델로 「경기도형 미니 수소도시」 공모사업 1호로 선정되어,

❍ 지역 내 수소 생산․소비 시스템 구축에 따른 저렴한 에너지원 공급으로 환경친화적 모빌리티 보급을 촉진하고 지속 가능한 미래에너지 전환을 바탕으로 탄소중립 및 기후변화 대응에 앞장서기 위해,

❍「공유재산 및 물품 관리법」제10조 및 같은 법 시행령 제7조에 따라 공유재산의 취득 계획에 대하여 의회의 의결을 얻고자 함.

2. 사업내용

❍ 사 업 명 : 용인특례시 미니 수소도시 조성 사업 (경기도 공모)

❍ 기본방향 : 에코타운 음식물쓰레기 처리 과정에서 발생하는 바이오

가스 활용 수소 생산․공급 (지역 생산․소비 시스템 구축)

❍ 위    치 : 처인구 포곡읍 신원리 19번지 일원

❍ 규    모 : 일일 수소생산량 500㎏

❍ 주요구조 : 수소생산시설, 튜브트레일러 캐노피, 방호벽 등

❍ 총사업비 : 100억원(도비 50%, 시비 50%)

❍ 사업기간 : 2023. 11. ~ 2026. 11.

❍ 사 업 량 : 부지면적 약3,300㎡, 관리시설 연면적 약610㎡ 신축

❍ 운영계획 : 위탁운영 (마스터플랜 수립 과정에서 세부 검토)

3. 주요 재산의 취득

가. 취득대상 재산

(단위 : ㎡, 백만원)

재 산 종 류	건 수	부지면적	예정가액	비 고
계			10,000
기타	1	3,300	10,000

붙임 사업설명서 및 위치도 1부.

용인특례시 미니 수소도시 조성사업

(소관부서 : 신성장전략국 신성장전략과)

□ 사업목적

❍ 에코타운의 음식물쓰레기 처리과정에서 나오는 바이오가스를 활용한 수소 생산 및 활용 모델로 「경기도형 미니 수소도시」 공모사업 1호로 선정되어,

❍ 지역 내 수소 생산․소비 시스템 구축에 따른 저렴한 에너지원 공급으로 환경친화적 모빌리티 보급을 촉진하고 지속 가능한 미래에너지 전환을 바탕으로 탄소중립 및 기후변화 대응에 앞장서고자 함.

□ 근거법령

❍ 「공유재산 및 물품관리법」 제10조의2 (공유재산관리계획)

❍ 「공유재산 및 물품관리법 시행령」 제7조 (공유재산관리계획)

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 용인특례시 미니 수소도시 조성 사업 (경기도 공모)

❍ 기본방향 : 에코타운 음식물쓰레기 처리 과정에서 발생하는 바이오

가스 활용 수소 생산․공급 (지역 생산․소비 시스템 구축)

❍ 위    치 : 처인구 포곡읍 신원리 19번지 일원

❍ 규    모 : 일일 수소생산량 500㎏

❍ 주요구조 : 수소생산시설, 튜브트레일러 캐노피, 방호벽 등

❍ 총사업비 : 100억원(도비 50%, 시비 50%)

❍ 사업기간 : 2023. 11. ~ 2026. 11.

❍ 사 업 량 : 부지면적 약3,300㎡, 관리시설 연면적 약610㎡ 신축

❍ 운영계획 : 위탁운영 (마스터플랜 수립 과정에서 세부 검토)

□ 재원 조달계획

❍ 재원별

(단위:백만원)

총사업비	재원조달계획				비 고
	계	시설비 (설계·감리·공사비)	용지비	기타
계	10,000	10,000	-	-
국비보조금	-	-	-	-
특별교부세	-	-	-	-
도비보조금	5,000	5,000	-	-
시 비	5,000	5,000	-	-
기 타	-	-	-	-

❍ 연도별

(단위:백만원)

총사업비	예산편성계획 연도					비 고
	계	기투자	2023년	2024년	2025년
계	10,000	-	200	5,000	4,800
국비보조금	-	-	-	-	-
특별교부세	-	-	-	-	-
도비보조금	5,000	-	100	2,500	2,400
시 비	5,000	-	100	2,500	2,400
기 타	-	-	-	-	-

□ 취득 재산

❍ 기   타

(단위 : 백만원)

건축물 용도	위 치	연면적	예정가액	주요시설	취득예정 시 기	비 고
수소생산 시설	포곡읍 신원리 19번지 일원	610㎡	10,000	수소생산시설, 튜브트레일러 캐노피	2026.11월

□ 추진실적 및 추진계획

❍‘23. 11. : 「경기도 미니 수소도시 조성사업」공모 선정 (`23.11.8.)

❍‘24.  1. : 업무협약 (참여기관)

❍‘24.  1. : 마스터플랜 및 기본설계 착수

❍‘24. 11. : 설계 및 인․허가

❍‘25.  1. : 핵심설비 선정 및 발주

❍‘26.  4. : 시운전 개시

❍‘26. 10. : 전체 통합공정 상업운전 개시

□ 기대효과

❍ (청정 에너지의 저렴한 공급으로 시민혜택) 지역 내 생산․소비의 안정적 수소 에너지 수급 환경 조성

❍ (폐자원 활용 청정수소 생산) 음식폐기물의 에너지원 재탄생으로 수소경제 활성화에 있어 내륙에 위치한 우리시의 불리한 입지 극복

❍ (탄소중립과 기후변화 대응) 미래 에너지 전환 시대를 위한 인프라 구축 및 청정 에너지 보급 활성화로 탄소중립 실천에 기여

□ 위치도 및 조감도 등

위치도 (예정지)
배치도

조감도