2023년도 제5차 공유재산 관리계획안(수시분)

【용인시의회 증축사업】

의 안 번 호	2023-	제출일자 : 2023. 12. . 제 출 자 : 용인시장

1. 제안이유

❍ 우리시는 꾸준한 인구 유입 및 지방자치법 개정에 따라 시의회 신축 당시 대비 상주인원이 2.3배 증가, 열악한 사무환경의 개선이 시급하며

❍ 용인반도체클러스터, 플랫폼시티 등 각종 개발사업으로 인구 유입이 지속될 전망으로 장래 행정수요 증가에 대비한 사무공간 확보가 필요하여 시의회를 증축하고자

❍ 「공유재산 및 물품 관리법」제10조 및 같은 법 시행령 제7조에 따라 공유재산의 취득 계획에 대하여 의회의 의결을 얻고자 함.

2. 사업내용

❍ 사 업 명 : 용인시의회 증축사업

❍ 위    치 : 처인구 중부대로 1199 (現 용인시의회 옆 녹지공간)

❍ 총사업비 : 10,803백만원(시비 100%)

❍ 사업기간 : 2023. 5. ~ 2026. 6.

❍ 사 업 량 : 부지면적 81,403.4㎡, 지상 4층, 연면적 1,904.25㎡ 증축

․ 1층(124.44㎡) : 전기실, 기계실 등

․ 2층(593.10㎡) : 상담실, 의원실 등

․ 3층(597.22㎡) : 회의실, 의원실 등

․ 4층(589.49㎡) : 주민편의공간, 대기실 등

3. 주요 재산의 취득

가. 취득대상 재산

(단위: ㎡, 백만원)

재 산 종 류	건 수	면 적	예정가액	비 고
계			10,803
건물	1	1,904.25	10,803

붙임  사업설명서 및 위치도 1부.  끝.

용인시의회 증축사업

(소관부서 : 재정국 재산관리과)

□ 사업목적

❍ 우리시는 꾸준한 인구 유입 및 지방자치법 개정에 따라 시의회 신축 당시 대비 상주 인원이 2.3배 증가, 열악한 사무환경의 개선이 시급하며

❍ 용인반도체클러스터, 플랫폼시티 등 각종 개발사업으로 인구 유입이 지속될 전망으로 장래 행정수요 증가에 대비한 사무공간 확보가 필요하여 시의회를 증축하고자 함.

□ 근거법령

❍ 「공유재산 및 물품관리법」제10조의2(공유재산관리계획)

❍ 「공유재산 및 물품관리법 시행령」제7조(공유재산관리계획)

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 용인시의회 증축사업

❍ 위    치 : 처인구 중부대로 1199 (現 용인시의회 옆 녹지공간)

❍ 총사업비 : 10,803백만원(시비 100%)

❍ 사업기간 : 2023. 5. ~ 2026. 6.

❍ 사 업 량 : 부지면적 81,403.4㎡, 지상 4층, 연면적 1,904.25㎡ 증축

․ 1층(124.44㎡) : 전기실, 기계실 등

․ 2층(593.10㎡) : 상담실, 의원실 등

․ 3층(597.22㎡) : 회의실, 의원실 등

․ 4층(589.49㎡) : 주민편의공간, 대기실 등

□ 재원 조달계획

❍ 재원별                                        (단위: 백만원)

총사업비	재원조달계획				비고
	계	시설비	용지비	기타
계	10,803	10,803
국비보조금
특별교부세
도비보조금
시 비	10,803	10,803
기부 채납

❍ 연도별                                        (단위: 백만원)

총사업비	예산편성계획 연도					비고
	계	기투자	2024년	2025년	2026년
계	10,803	34	610	6,759	3,400
국비보조금						24년 본예산
특별교부세
도비보조금
시 비	10,803	34	610	6,759	3,400
기 타

□ 취득재산

❍ 건   물                                       (단위 : ㎡, 백만원)

건축물 용도	위 치	연면적	예정가액	취득예정 시 기	비 고
업무시설 (시의회청사)	용인시 처인구 중부대로 1199	1,904.25	10,803	‘26. 6월

□ 추진실적 및 추진계획

❍‘23.  5. : 건축기획 용역 착수

❍‘23. 10. : 사업계획에 대한 사전검토(경기도 공공건설지원센터)

❍‘23. 10. : 용인시의회 증축사업 기본계획(방침)

❍‘23. 11. : 투자심사 및 공유재산 심의

❍‘23. 11. : 중기지방재정투자계획 반영

❍‘23. 12. : 공유재산 관리계획 수립

❍‘24.  1. : 설계공모

❍‘24.  5. ∼ ‘24. 12. : 실시설계

❍‘25.  2. ∼ ‘26. 6. : 공사 착공 및 준공

□ 기대효과

❍ 의원, 사무조직 확대 및 인력증원에 따른 공간 부족 해소

❍ 적정 사무공간 제공에 따른 업무 효율성 증가

□ 위치도 및 현장사진

위치도
현장 사진

□ 조감도